ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
05.06.2009 г.
N 150

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ
УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 28 ноября 2008 года N УП-4058 “О Программе мер по поддержке предприятий реального сектора экономики, обеспечению их стабильной работы и увеличению экспортного потенциала”, а также в целях совершенствования системы учета и контроля потребления электрической энергии хозяйствующими субъектами, городскими и сельскими потребителями Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что ГАК “Узбекэнерго”:
реализуются пилотные проекты по апробации Автоматизированной системы учета и контроля потребления электрической энергии на предприятиях ГАК “Узбекэнерго” в г. Ангрене, Ташкентской области и отдельных районах города Ташкента;
разрабатывается инвестиционный проект “Внедрение Автоматизированной системы учета и контроля потребления электрической энергии ГАК “Узбекэнерго”.

2. Утвердить графики:
внедрения Автоматизированной системы учета и контроля потребления электрической энергии на предприятиях ГАК “Узбекэнерго” согласно приложениям NN 1 и 1а;
установки в рамках внедрения Автоматизированной системы учета и контроля потребления электрической энергии современных электронных приборов учета электрической энергии у хозяйствующих субъектов согласно приложению N 2;
установки в рамках внедрения Автоматизированной системы учета и контроля потребления электрической энергии современных электронных приборов учета электрической энергии у бытовых потребителей согласно приложению N 3.

3. ГАК “Узбекэнерго” совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента, министерствами и ведомствами, хозяйствующими субъектами в срок до 1 июля 2009 года разработать и утвердить, на основании приложения N 2 к настоящему постановлению, территориальные и отраслевые графики внедрения электронных приборов и аппаратных комплексов учета электрической энергии с указанием конкретных сроков, источников финансирования и ответственных лиц.

4. Возложить персональную ответственность:
на председателей ГАК “Узбекэнерго” и Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента, руководителей Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору в электроэнергетике, министерств и ведомств, хозяйствующих субъектов - за безусловное исполнение утвержденных графиков установки в рамках внедрения Автоматизированной системы учета и контроля потребления электрической энергии электронных приборов учета;
на председателя ГАК “Узбекэнерго” - за обеспечение защиты Автоматизированной системы учета и контроля потребления электрической энергии от искажения показаний и несанкционированного доступа к информации.

5. Установить, что:
замена существующих и установка современных электронных приборов учета электрической энергии, подключаемых к Автоматизированной системе учета и контроля потребления электрической энергии, у бытовых потребителей осуществляется за счет собственных средств предприятий ГАК “Узбекэнерго”;
замена существующих и установка современных электронных приборов и аппаратных комплексов учета электрической энергии у хозяйствующих субъектов осуществляется за счет их собственных средств;
поставка электрической энергии потребителям, присоединенным к Автоматизированной системе учета и контроля потребления электрической энергии, производится на основании двустороннего договора электроснабжения в пределах осуществленной предоплаты.

6. ГАК “Узбекэнерго” совместно с Государственной инспекцией Республики Узбекистан по надзору в электроэнергетике, Государственным комитетом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, другими заинтересованными министерствами и ведомствами, хозяйствующими субъектами обеспечить, начиная с 1 июля 2009 года, прием вновь вводимых объектов строительства при условии их оснащенности современными электронными приборами и аппаратными комплексами учета электрической энергии.

7. ГАК “Узбекэнерго”, министерствам и ведомствам, хозяйствующим субъектам обеспечить, начиная с 1 июля 2009 года:
оснащение вновь вводимых объектов и внедрение в 2009-2010 годах на действующих объектах энергопотребления с присоединенной мощностью 750 кВА и выше многофункциональных электронных приборов учета электрической энергии, совместимых с Автоматизированной системой учета и контроля потребления электрической энергии;
оснащение вновь вводимых объектов и внедрение в 2009 - 2011 годах на действующих объектах энергопотребления хозяйствующих субъектов электронных приборов учета электрической энергии, совместимых с Автоматизированной системой учета и контроля потребления электрической энергии;
комплексную защиту Автоматизированной системы учета и контроля потребления электрической энергии от искажения показаний и несанкционированного доступа к информации, предусмотрев при этом минимизацию влияния человеческого фактора.

8. ГАК “Узбекэнерго”:
обеспечить в срок до 1 июля 2009 года завершение разработки инвестиционного проекта “Внедрение Автоматизированной системы учета и контроля потребления электрической энергии ГАК “Узбекэнерго” с конкретными технико-экономическими параметрами и необходимыми требованиями к электронным приборам и аппаратным комплексам учета электрической энергии;
обеспечить унификацию процедур передачи, сбора, обработки и хранения данных в рамках внедряемой Автоматизированной системы учета и контроля потребления электрической энергии;
привлекать ведущих отечественных и иностранных экспертов для разработки комплексных решений по защите Автоматизированной системы учета и контроля потребления электрической энергии от искажения показаний и несанкционированного доступа;
реализовать инвестиционный проект “Внедрение Автоматизированной системы учета и контроля потребления электрической энергии” одностадийно, с разработкой типовых решений для применения их на различных категориях объектов;
начиная с 1 января 2012 года, не производить поставку электрической энергии потребителям - хозяйствующим субъектам, не установившим соответствующие установленным требованиям электронные приборы и аппаратные комплексы учета электрической энергии.

9. Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Узбекскому агентству по печати и информации совместно с ГАК “Узбекэнерго”, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента систематически освещать в средствах массовой информации ход реализации положений настоящего постановления.

10. ГАК “Узбекэнерго”, Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору в электроэнергетике, Государственному комитету Республики Узбекистан по архитектуре и строительству совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок:
внести предложения в Кабинет Министров по внесению изменений и дополнений в законодательство, вытекающие из настоящего постановления;
привести ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Э.Р. Шаисматова.

Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                         Ш. Мирзияев

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз 
от 05.06.2009 г. N 150

ГРАФИК
внедрения Автоматизированной системы
учета и контроля потребления электрической 
энергии на предприятиях ГАК “Узбекэнерго”
          
Наименование территорий	Электростанции 
и подстанции Магистральных электрических сетей	  
Границы 
предприятий 
электрических 
сетей и районных
электрических
сетей
  	Крупные
потребители 
(мощностью 
750 кВА и
выше)*	Всего за 2009 г.	
	2009 г.	2009 г.	2009 г.		
	количество 
центров сбора
информации	количество
приборов 
(шт.)	количество 
приборов (шт.)	количество 
приборов (шт.)	количество 
центров сбора
информации	количество
приборов (шт.)	
Реcпублика Каракалпакстан
  	2	89	420	48	2	557	
Андижанская область
  	1	119	712	145	1	976	
Бухарская область
  	1	116	983	81	1	1 180	
Джизакская область
  	1	78	759	74	1	911	
Кашкадарьинская область
  	3	342	391	67	3	800	
Навоийская область
  	2	233	171	248	2	652	
Наманганская область
  	1	44	680	113	1	837	
Самаркандская область
  	1	136	574	124	1	834	
Сурхандарьинская область
  	1	86	377	133	1	596	
Сырдарьинская область
  	3	231	333	39	3	603	
Ташкентская область
  	8	542	545	186	8	1 273	
Ферганская область
  	2	118	631	114	2	863	
Хорезмская область
  	1	64	313	67	1	444	
г. Ташкент
 	4	296	1451	521	4	2 268	
Всего ** 
   	31	2 494	8 340	1 960	31	12 794	

Примечания:
*) За счет собственных средств хозяйствующих субъектов.
**) Графиком предусматривается подключение всех точек учета электроэнергии к АСКУЭ.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1а
к Постановлению КМ РУз 
от 05.06.2009 г. N 150

ГРАФИК
внедрения Автоматизированной системы учета
и контроля потребления электрической энергии 
на предприятиях ГАК “Узбекэнерго”
(на трансформаторных пунктах
предприятий электрических сетей)

шт.
Наименование территорий	2009 г.	2010 г.	2011 г.*	Всего 
за 2009 - 2011 гг.	
	количество 
приборов учета  	количество 
приборов учета	количество 
приборов учета	количество 
приборов учета	
Реcпублика Каракалпакстан
  	576	2 244	3 134	5 954	
Андижанская область
  	877	2 095	4 761	7 773	
Бухарская область
  	611	2 090	3 314	6 015	
Джизакская область
   	387	1 490	2 103	3 980	
Кашкадарьинская область
  	1 248	3 980	6 772	12 000	
Навоийская область
  	376	1 187	2 041	3 604	
Наманганская область
  	818	2 040	4 439	7 297	
Самаркандская область
  	1 435	3 294	7 789	12 518	
Сурхандарьинская область
  	496	1 156	2 696	4 348	
Сырдарьинская область
  	224	1 696	1 214	3 134	
Ташкентская область
  	773	2 199	4 194	7 166	
Ферганская область
  	950	4 018	5 157	10 125	
Хорезмская область
  	556	1 530	3 020	5 106	
г. Ташкент
  	840	2 226	1 680	4 746	
Всего
  	10 167	31 245	52 314	93 726	

Примечание.
*) Количество приборов может быть откорректировано с учетом ввода новых трансформаторных пунктов, а также баланса электрической энергии по отходящим фидерам трансформаторных пунктов.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз 
от 05.06.2009 г. N 150

ГРАФИК
установки в рамках внедрения Автоматизированной
системы учета и контроля потребления электрической
 энергии современных электронных приборов
учета электрической энергии
у хозяйствующих субъектов
  
шт.
   
Наименование территорий
  	2009 г.	2010 г.	2011 г.*	Всего 
за 2009 - 2011 гг.	
Реcпублика Каракалпакстан
    	2 479	3 501	5 930	11 910	
Андижанская область
           	6 744	8 670	11 572	26 986	
Бухарская область
         	4 471	5 431	8 114	18 016	
Джизакская область
         	1 918	2 612	4 346	8 876	
Кашкадарьинская область
             	5 560	6 908	9 191	21 659	
Навоийская область
          	1 611	3 296	5 295	10 202	
Наманганская область
             	4 403	7 877	11 994	24 274	
Самаркандская область
        	8 149	10 243	13 011	31 403	
Сурхандарьинская область
          	6 740	9 300	12 972	29 012	
Сырдарьинская область
        	1 319	2 290	3 406	7 015	
Ташкентская область
            	3 397	7 851	11 023	22 271	
Ферганская область
            	8 984	13 638	17 793	40 415	
Хорезмская область
          	2 709	5 428	9 500	17 637	
г. Ташкент
      	6 503	12 040	20 700	39 243	
Всего
   	64 987	99 085	144 847	308 919	

Примечание.
*) Количество приборов, включенных в план 2011 года, может быть откорректировано исходя из фактического количества абонентов.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Постановлению КМ РУз 
от 05.06.2009 г. N 150

ГРАФИК
установки в рамках внедрения Автоматизированной
системы учета и контроля потребления электрической
энергии современных электронных приборов учета
электрической энергии у бытовых потребителей
                  
Наименование территорий	2009 г.	2010 г.	2011 г.*	Всего
 за 2009 - 2011 гг.	
	количество 
приборов (шт.)   	количество 
приборов  (шт.)	количество 
приборов (шт.)	количество 
приборов (шт.)	
Реcпублика Каракалпакстан
     	42 847	61 209	85 693	189 749	
Андижанская область
     	76 293	108 989	152 585	337 867	
Бухарская область
     	51 571	73 672	103 141	228 384	
Джизакская область
     	26 168	37 383	52 335	115 886	
Кашкадарьинская область
    	72 774	103 963	145 549	322 286	
Навоийская область
     	26 461	37 801	52 922	117 184	
Наманганская область
       	75 101	107 287	150 203	332 591	
Самаркандская область
       	87 204	124 576	174 407	386 187	
Сурхандарьинская область
   	55 127	78 753	110 255	244 135	
Сырдарьинская область
    	23 438	33 482	46 875	103 795	
Ташкентская область
   	90 338	129 055	180 677	400 070	
Ферганская область
   	105 224	150 320	210 448	465 992	
Хорезмская область
   	43 736	62 480	87 472	193 688	
г. Ташкент
   	123 145	175 921	246 290	545 356	
Всего
    	899 427	1 284 891	1 798 852	3 983 170	

Примечание.
*) Количество приборов, включенных в план 2011 года, может быть откорректировано исходя из фактического количества абонентов.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 24, ст. 268