ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
13.12.2016 г.
N 404

См. текст документа
на узбекском языке

О МЕРАХ 
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГОРОДА НАМАНГАНА НА ПЕРИОД 
2017-2019 ГОДЫ

Приложение N 1. Перечень улиц города Намангана,
подлежащих капитальному ремонту в 2017-2019 годах
                 
Приложение N 2. Прогнозные объемы работ по реконструкции
и строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры -
систем водоснабжения, канализации, электроснабжения, 
газоснабжения и телекоммуникаций города Намангана 
на период 2017-2019 годы
                  
Приложение N 3. Прогнозные объемы полиэтиленовых труб,
выделяемых ООО "Шуртанский газохимический комплекс"
для реконструкции и строительства систем водоснабжения
и канализации города Намангана на период 2017-2019 годы

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 24 ноября 2015 года N ПП-2439 "О Программе развития промышленного потенциала Наманганской области на 2016 - 2019 годы", в целях дальнейшего совершенствования дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках реализации генерального плана развития города Намангана, а также обновления его архитектурного облика путем осуществления современной застройки и благоустройства вдоль магистральных улиц Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
перечень улиц города Намангана, подлежащих капитальному ремонту в 2017-2019 годах (далее - перечень), согласно приложению N 1;
прогнозные объемы работ по реконструкции и строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры - систем водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения и телекоммуникаций города Намангана на период 2017-2019 годы - согласно приложению N 2.

2. Определить:
заказчиком работ по капитальному ремонту включенных в перечень улиц города Намангана, а также реконструкции и строительству систем водоснабжения и канализации города Намангана - ГУП "Инжиниринговая компания "Служба единого заказчика" хокимията Наманганской области";
генеральной проектной организацией по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту включенных в перечень улиц города Намангана - ООО "Йул - лойиха бюроси";
генеральные проектные организации по разработке проектно-сметной документации по реконструкции и строительству систем водоснабжения и канализации города Намангана - по результатам конкурсных торгов в установленном порядке;
генеральные подрядные организации по капитальному ремонту включенных в перечень улиц города Намангана, а также реконструкции и строительству систем водоснабжения и канализации города Намангана - по результатам конкурсных торгов в установленном порядке.

3. Определить источниками финансирования работ по реконструкции и строительству дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры города Намангана в 2017-2019 годах:
средства Республиканского дорожного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан - в части капитального ремонта в пределах красных линий включенных в утвержденный перечень улиц города Намангана;
средства местного бюджета и другие средства, не запрещенные законодательством - в части сноса объектов, расположенных вдоль включенных в утвержденный перечень улиц города Намангана;
средства капитальных вложений - в части реконструкции и строительства расположенных вдоль включенных в утвержденный перечень улиц города Намангана систем водоснабжения и канализации города Намангана, предусмотренных в приложении N 2 к настоящему постановлению;
собственные средства АО "Узбекэнерго", АК "Узтрансгаз" и АК "Узбектелеком" соответственно - в части реконструкции расположенной вдоль включенных в утвержденный перечень улиц города Намангана инженерно-коммуникационной инфраструктуры - систем электроснабжения, газоснабжения и телекоммуникаций, предусмотренных в приложении N 2 к настоящему постановлению.

4. НХК "Узбекнефтегаз" и ООО "Шуртанский газохимический комплекс" обеспечить, по обоснованным заявкам заказчика, выделение подрядным организациям, определенным в установленном порядке для выполнения работ по реконструкции и строительству систем водоснабжения и канализации города Намангана на период 2017-2019 годы, полиэтиленовых труб в объемах согласно приложению N 3, по декларированным ценам на полиэтиленовые гранулы.

5. Министерству экономики и Министерству финансов Республики Узбекистан ежегодно при формировании Инвестиционной программы Республики Узбекистан на предстоящий год предусматривать соответствующие средства капитальных вложений на проектирование, реконструкцию и строительство систем водоснабжения и канализации города Намангана.

6. Хокимияту Наманганской области обеспечить разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации:
по поэтапному капитальному ремонту включенных в утвержденный перечень улиц города Намангана совместно с Республиканским дорожным фондом при Министерстве финансов Республики Узбекистан и ООО "Йул-лойиха бюроси"; 
по реконструкции и строительству систем водоснабжения и канализации города Намангана совместно с Узбекским агентством "Узкоммунхизмат".

7. Госархитектстрою Республики Узбекистан обеспечить проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и установить государственный архитектурно-строительный надзор за качеством выполнения строительно-монтажных работ объектов.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Б.И. Закирова и хокима Наманганской области Х.Х. Бозарова.

Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУУз
от 13.11.2016 г. N 404

ПЕРЕЧЕНЬ
улиц города Намангана, подлежащих
капитальному ремонту в 2017-2019 годах

N	Наименование 
мероприятия	   
Расчет-
ная стои-
мость*
(млн сум.)
   	   
В том числе по годам
   	Источники 
финансирования	Ответственные 
исполнителя	
			2017 г.
	2018 г.	2019 г.			
1.	Капитальный ремонт участка 0 - 6 км автомобильной дороги по ул Уйчинской 4Р-116 "г. Наманган - г. Уйчи - г. Учкурган - г. Хаккулабад - г. Андижан" (с элементами реконструкции)
 	13200,0	5000,0	8200,0		Средства Республиканского дорожного фонда	Хокимият Наманганской области, ГУП Инжиниринговая компания "Служба единого заказчика" хокимията Наманганской области, Республиканский дорожный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан
 	
2.	Капитальный ремонт участка 2,2 км автомобильной дороги по ул. Хамрох
 	3400,0		3400,0				
3.	Капитальный ремонт участка 3,0 км автомобильной дороги по ул. Галаба
 	4600,0		4600,0				
4.	Капитальный ремонт участка 3,47 км автомобильной дороги по ул. Маргиланской
 	8150,0			8150,0			
5.	Капитальный ремонт участка 3,5 км автомобильной дороги по ул. Кокандской
 	5900,0			5900,0			
 	Итого
 	35250,0	5000,0	16200,0	14050,0	 	 	

*) Расчетная стоимость подлежит уточнению по итогам разработки и утверждения проектно-сметной документации.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУУз
от 13.11.2016 г. N 404

ПРОГНОЗНЫЕ ОБЪЕМЫ
работ по реконструкции и строительству
инженерно-коммуникационной инфраструктуры - систем
водоснабжения, канализации, электроснабжения,
газоснабжения и телекоммуникаций города
Намангана на период 2017-2019 годы

N
п/п	Наименование 
мероприятия	   
Расчетная
стоимость*
(млн сум.)
   	   
В том числе по годам
   	Источники 
финансирования	Ответственные 
исполнители	
			   
2017 г.
   	2018 г.	2019 г.			
   
Реконструкция систем водоснабжения 
   	
1.	Реконструкция 6,0 км магистрального водовода по ул. Уйчинской диаметром до 450 мм
 	5 015,4	5 015,4	 	 	Республиканский бюджет в параметрах Инвестиционной программы Республики Узбекистан	Хокимият Наманганской области, Агентство "Узкоммунхизмат", Минфин, Минэкономики	
2.	Реконструкция 3,68 км магистрального водовода по ул. Хамрох диаметром от 500 мм до 1000 мм
 	6 959,5	2 959,5	4 000,0	 			
3.	Реконструкция 2,26 км магистрального водовода по ул. Галаба диаметром от 315 мм
 	845,0	 	845,0	 			
4.	Реконструкция 2,47 км магистрального водовода по ул. Маргиланской диаметром до 500 мм
 	1 460,0	 	1 460,0	 			
5.	Реконструкция 5,3 км магистрального водовода по ул. Кокандской диаметром до 560 мм
 	1 931,1	 	 	1 931,1			
 	Итого
 	16211,0	7974,9	6305,0	1931,1	 	 	
         
Строительство систем канализации
        	
1.	Строительство систем канализации протяженностью 2,475 км по ул. Уйчинской диаметром до 630 мм 
 	1 184,0	1 184,0	 	 	Республиканский бюджет в параметрах Инвестиционной программы Республики Узбекистан	хокимият Наманганской области, Агентство "Узкоммунхизмат", Минфин, Минэкономики	
2.	Строительство систем канализации протяженностью 1,522 км по ул. Хамрох диаметром до 500 мм
 	1 190,0	 	1 190,0	 			
3.	Строительство систем канализации протяженностью 0,82 км по ул. Маргиланской диаметром до 355 мм
 	520,0	 	520,0	 			
4.	Строительство систем канализации протяженностью 5,8 км по ул. Кокандской диаметром от 400 мм до 1000 мм
 	4 990,9	 	 	4 990,9			
 	Итого
 	7884,9	1184,0	1710,0	4990,9	 	 	
       
Реконструкция систем электроснабжения
        	
1.	Реконструкция ЛЭП 11,2 км 0,4 кВ от ТП-442, ТП-404, ТП-226, ТП-227, ТП-768, ТП-354,ТП-223 по ул. Уйчинской
 	784,0	784,0	 	 	АО "Узбекэнерго"	АО "Узбекэнерго", хокимият Наманганской области	
2.	Реконструкция ТП-442, ТП-404, ТП-226, ТП-227, ТП-768,ТП-354,ТП-223 по ул. Уйчинской
 	280,0	280,0	 	 			
3.	Реконструкция КЛ 1,0 км от подстанции 110/6 кв "ГЭС 11А" по ул. Уйчинской
 	120,0	120,0	 	 			
4.	Реконструкция ЛЭП 3,0 км 0,4 кВ от ТП-188, ТП-20, ТП-14, ТП-17, ТП-497 по ул. Хамрох
 	210,0	210,0	 	 			
5.	Реконструкция ТП-188, ТП-20, ТП-14, ТП-17, ТП-497 по ул. Хамрох
 	200,0	200,0	 	 			
6.	Реконструкция ЛЭП 9,25 км 0,4 кВ от ТП-42, ТП-87, ТП-75, ТП-541 по ул. Маргиланской
 	647,0	 	647,0	 			
7.	Реконструкция ТП-42, ТП-87, ТП-75, ТП-541 по ул. Маргеланской
 	160,0	 	160,0	 			
8.	Реконструкция ЛЭП 4,035 км 6 кВ от подстанции 110/6 кв "Нестле" по ул. Маргиланской
 	325,0	 	325,0	 			
9.	Реконструкция ЛЭП 6,1 км 0,4 кВ от ТП-49, ТП-1046, ТП-1045, ТП-55, ТП-57, ТП-52, ТП-86, ТП-89, ТП-778 по ул. Кокандской
 	427,0	 	 	427,0			
10.	Реконструкция ТП-49, ТП-1046, ТП-1045, ТП-55, ТП-57, ТП-52, ТП-86, ТП-89, ТП-778 по ул. Кокандской
 	360,0	 	 	360,0			
11.	Реконструкция ЛЭП 3,5 км 6 кВ от подстанции 110/6 кв "Тегирмон" по ул. Кокандской
 	282,0	 	 	282,0			
 	Итого
 	3795,0	1594,0	1132,0	1069,0	 	 	
      
Реконструкция систем газоснабжения
    	
1.	Реконструкция систем газоснабжения среднего давления Д-159 мм протяженностью 10,0 км по ул. Уйчинской
 	2 667,0	2 667,0	 	 	АК "Узтрансгаз"	АО "Узтрансгаз", хокимият Наманганской области	
2.	Реконструкция систем газоснабжения среднего давления Д-159 мм протяженностью 2,5 км по ул. Хамрох
 	678,2	678,2	 	 			
3.	Реконструкция систем газоснабжения среднего давления Д-159 мм протяженностью 4,5 км по ул. Маргеланской
 	1 219,1	 	1 219,1	 			
4.	Реконструкция систем газоснабжения среднего давления Д-159 мм протяженностью 3,5 км по ул. Кокандской
 	1 070,7	 	 	1 070,7			
 	Итого
 	5635,0	3345,2	1219,1	1070,7	 	 	
       
Реконструкция систем телекоммуникаций
      	
1.	Реконструкция и модернизация кабельных линий связи по ул. Уйчинской, прокладка оптического и медного кабеля протяженностью 5,5 км
 	223,0	223,0	 	 	АО "Узбектелеком"	АО "Узбектелеком", хокимият Наманганской области	
2.	Реконструкция и модернизация кабельных линий связи по ул. Хамрох, прокладка оптического и медного кабеля протяженностью 2,2 км 
 	118,0	118,0	 	 			
3.	Реконструкция и развитие оптических сетей связи с применением технологий FTT по ул. Галаба протяженностью 2,8 км
 	30,0	 	30,0	 			
4.	Реконструкция и модернизация кабельных линий связи по ул. Маргиланской, прокладка оптического и медного кабеля протяженностью 4,3 км и установка мини MSAN
 	178,5	 	178,5	 			
5.	Реконструкция и строительство кабельных линий связи с применением технологий FTT по ул. Кокандской протяженностью 3,45 км 
 	179,5	 	 	179,5			
 	Итого
 	729,0	341,0	208,5	179,5	 	 	

*) Расчетная стоимость подлежит уточнению по итогам разработки и утверждения проектно-сметной документации.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Постановлению КМ РУУз
от 13.11.2016 г. N 404

ПРОГНОЗНЫЕ ОБЪЕМЫ
полиэтиленовых труб, выделяемых ООО "Шуртанский
газохимический комплекс" для реконструкции
и строительства систем водоснабжения и канализации
города Намангана на период 2017-2019 годы

N
п/п	Наименование 
мероприятия	Длина 
п/э труб 
(км)	Вес 
труб 
(тн)	    
Расчетная 
стоимость 
по льготным 
ценам 
(млн сум.)

     
Реконструкция систем водоснабжения 
    	
1.	Реконструкция 6,0 км магистрального водовода по ул. Уйчинской диаметром до 450 мм
 	-	-	-	
2.	Реконструкция 3,68 км км магистрального водовода по ул. Хамрох диаметром от 500 мм до 1000 мм
 	1,8	97,6	6959,5	
3.	Реконструкция 2,26 км магистрального водовода по ул. Галаба диаметром от 315 мм 
 	2,26	37,5	845,0	
4.	Реконструкция 2,47 км магистрального водовода по ул. Маргиланской диаметром до 500 мм
 	2,47	117,0	1460,0	
5.	Реконструкция 5,3 км магистрального водовода по ул. Кокандской диаметром до 560 мм
 	5,3	184,9	1931,1	
 	Итого
 	11,83	437,0	11195,6	
    
Строительство систем канализации
   	
1.	Строительство систем канализации протяженностью 2,475 км по ул. Уйчинской диаметром до 630 мм 
 	2,475	73,9	1184,0	
2.	Строительство систем канализации протяженностью 1,522 км по ул. Хамрох диаметром до 500 мм
 	1,522	25,8	1190,0	
3.	Строительство систем канализации протяженностью 0,82 км по ул. Маргеланской диаметром до 355 мм
 	0,82	10,1	520,0	
4.	Строительство систем канализации протяженностью 5,8 км по ул. Кокандской диаметром от 400 мм до 1000 мм
 	3,021	124,0	4609,0	
 	Итого
 	7,838	233,8	7503,0	
 	Всего
 	19,668	670,8	18698,6	

Примечание. Размер и диаметры труб, а также фитингов представляется ООО "Шуртанский газохимический комплекс" заказчиком согласно утвержденной проектно-сметной документации.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
19 декабря 2016 г., N 50, ст. 568