ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
24.03.2015 г.
N 65

О МЕРАХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
НА АО “АММОФОС-МАКСАМ”
И ГП “НАВОИЙСКИЙ ГМК”

Приложение N 1. Перечень вводимых и выводимых
из эксплуатации морально и физически устаревших мощностей
по производству серной кислоты в 2016 - 2019 гг. путем реализации
инвестиционных проектов “Строительство нового производства
серной кислоты мощностью 650 тыс. тонн в год на АО “Аммофос-
Максам” и “Строительство нового производства серной кислоты
мощностью 650 тыс. тонн в год на ГП “Навоийский ГМК”
              
Приложение N 2. План мероприятий по подготовке и реализации
инвестиционных проектов “Строительство нового производства
серной кислоты мощностью 650 тыс. тонн в год на АО “Аммофос-
Максам” и “Строительство нового производства серной кислоты
мощностью 650 тыс. тонн в год на ГП “Навоийский ГМК”

В целях обеспечения непрерывного технического и технологического обновления производства серной кислоты, наиболее полного удовлетворения растущих потребностей химической и горно-металлургической промышленности в ней, а также возмещения выбывающих мощностей Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять предложения Министерства экономики Республики Узбекистан, ГАК “Узкимёсаноат” и ГП “Навоийский ГМК” о строительстве новых производств серной кислоты суммарной мощностью 1300 тыс. тонн в год, с выводом из эксплуатации морально и физически устаревших мощностей путем реализации в 2016 - 2019 годах инвестиционных проектов “Строительство нового производства серной кислоты мощностью 650 тыс. тонн в год на АО “Аммофос-Максам” и “Строительство нового производства серной кислоты мощностью 650 тыс. тонн в год на ГП “Навоийский ГМК” по перечню согласно приложению N 1.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и реализации инвестиционных проектов “Строительство нового производства серной кислоты мощностью 650 тыс. тонн в год на АО “Аммофос-Максам” и “Строительство нового производства серной кислоты мощностью 650 тыс. тонн в год на ГП “Навоийский ГМК” согласно приложению N 2.

3. Определить источниками финансирования инвестиционных проектов “Строительство нового производства серной кислоты мощностью 650 тыс. тонн в год на АО “Аммофос-Максам” и “Строительство нового производства серной кислоты мощностью 650 тыс. тонн в год на ГП “Навоийский ГМК” собственные средства инициаторов инвестиционных проектов, кредиты коммерческих банков, в том числе иностранных, а также средства Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан.

4. Определить институт “Узкимёсаноатлойиха” генеральным проектировщиком по инвестиционным проектам, предусмотренным приложением N 1.

5. Разрешить ГАК “Узкимёсаноат” и ГП “Навоийский ГМК” в рамках реализации указанных инвестиционных проектов:
определять генеральных подрядчиков по строительству объектов на условиях “под ключ” путем проведения закрытых тендерных торгов среди мировых компаний, имеющих опыт и соответствующие технологии;
совместно с отобранными по результатам закрытых тендерных торгов генеральными подрядчиками до утверждения технико-экономического обоснования инвестиционных проектов осуществлять строительные работы одновременно с разработкой проектной документации; 
открывать финансирование до утверждения технико-экономического обоснования инвестиционных проектов по импортным контрактам, прошедшим экспертизу в установленном порядке, а также по контрактам, заключенным с отечественными подрядчиками и поставщиками.

6. Госархитектстрою Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке государственную экспертизу проектно-сметной документации по указанным инвестиционным проектам и установить государственный архитектурно-строительный надзор за качеством выполнения строительных работ.

7. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан по заявкам ГАК “Узкимёсаноат” и ГП “Навоийский ГМК” обеспечить оформление многократных въездных виз иностранным специалистам, участвующим в реализации указанных инвестиционных проектов, без взимания консульских и иных сборов.

8. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан по заявкам ГАК “Узкимёсаноат” и ГП “Навоийский ГМК” обеспечить оформление, выдачу и продление многократных въездных виз, а также временную прописку и продление временной прописки по месту временного проживания иностранных специалистов, участвующих в реализации указанных инвестиционных проектов, без взимания государственной пошлины.

9. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан обеспечить по заявкам ГАК “Узкимёсаноат” и ГП “Навоийский ГМК” выдачу (продление) в установленном порядке разрешений на привлечение в Республику Узбекистан высококвалифицированных иностранных специалистов (при отсутствии таких специалистов из числа граждан Республики Узбекистан), участвующих в реализации указанных инвестиционных проектов, а также выдачу (продление) привлекаемым иностранным специалистам подтверждений на право трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Г.И. Ибрагимова.

Президент
Республики Узбекистан                                                      И. Каримов

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 24.03.2015 г. N 65

ПЕРЕЧЕНЬ
вводимых и выводимых из эксплуатации морально
и физически устаревших мощностей по производству
серной кислоты в 2016 - 2019 гг. путем реализации
инвестиционных проектов  “Строительство
нового производства серной кислоты мощностью
650 тыс. тонн в год на АО “Аммофос-Максам”
и “Строительство нового производства серной
кислоты мощностью 650 тыс. тонн в год
на ГП “Навоийский ГМК”
         
тыс. тонн
N	Наименование 
предприятия	Мощности серной кислоты	  
  
Прогнозируемая
мощность на 
31.12.2020 г.

		действующая	выводимая	создаваемая		
		  
на 
01.01.2015 г.
  	год 
ввода	мощность	год 
вывода	мощность	год начала
 и завершения 
строительства  		
 	Всего
  	950,0	 	950,0	 	1300,0	 	1300,0	
1.	АО “Аммофос-Максам”
  	500,0	1981 г.	500,0	2018 г.	650,0	2016 - 2018 гг.	650,0	
2.	ГП “Навоийский ГМК”
  	450,0	1985 г.	450,0	2019 г.	650,0	2017 - 2019 гг.	650,0	

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 24.03.2015 г. N 65

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и реализации инвестиционных проектов
“Строительство нового производства серной кислоты
мощностью 650 тыс. тонн в год на АО “Аммофос-
Максам” и “Строительство нового производства
серной кислоты мощностью 650 тыс. тонн
в год на ГП “Навоийский ГМК”

I. По инвестиционному проекту “Строительство нового
производства серной кислоты мощностью 650 тыс. тонн в год
на АО “Аммофос-Максам”
II. По инвестиционному проекту “Строительство нового
производства серной кислоты мощностью 650 тыс. тонн
в год на ГП “Навоийский ГМК”

N	Наименование мероприятия	Срок завершения	         
Ответственные министерства, 
ведомства

I. По инвестиционному проекту “Строительство нового производства серной кислоты
мощностью 650 тыс. тонн в год на АО “Аммофос-Максам” 

1. Проектно-изыскательные работы с подготовкой предпроектной документации
      	
1.	Подбор оптимальной технологии производства серной кислоты, отвечающей требованиям энергоэффективности.
          	апрель 2015 г.	ГАК “Узкимёсаноат”, 
АО “Аммофос-Максам”,
 институт “Узкимё-
саноатлойиха”, МВЭСИТ
          	
2.	Подготовка исходных данных для разработки предварительного технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.
    	май 2015 г.	ГАК “Узкимёсаноат”, 
АО “Аммофос-Максам”,
 институт “Узкимё-
саноатлойиха”
          	
3.	Разработка предварительного технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.
        	июль 2015 г.	ГАК “Узкимёсаноат”,
АО “Аммофос-Максам”,
 институт “Узкимё-
саноатлойиха”
        	
4.	Проведение экспертизы предварительного технико-экономического обоснования на научно-техническом совете института “Узтяжнефтегазхимпроект”.	август 2015 г.	Институт “Узтяжнефте-
газхимпроект”,
ГАК “Узкимёсаноат”,
 АО “Аммофос-Максам”
      	
5.	Согласование предварительного технико-экономического обоснования проекта в уполномоченных органах экспертизы.	сентябрь 2015 г.	ГАК “Узкимёсаноат”, 
АО “Аммофос-Максам”, 
Минэкономики, Минфин, 
МВЭСИТ, Госархитектстрой,
 ФРРУ, АКБ “Узпромстройбанк”
         	
6.	Внесение в Кабинет Министров предварительного технико-экономического обоснования инвестиционного проекта для утверждения в установленном порядке.	октябрь 2015 г.	ГАК “Узкимёсаноат”,
Комплекс по вопросам
геологии, ТЭК, химической,
нефтехимической 
и металлургической 
промышленности Кабинета 
Министров, министерства
и ведомства 

2. Организация процедур по подготовке и проведению закрытых тендерных торгов
по выбору генерального подрядчика по строительству объекта на условиях “под ключ”
                	
7.	Включение инвестиционного проекта в адресный список строек 2016 года.	январь 2016 г.	ГАК “Узкимёсаноат”,
 Министерство экономики, 
МВЭСИТ, Министерство
 финансов
 	
8.	Разработка и экспертиза тендерной документации. Заключение контракта с организатором торгов.	декабрь 2015 г. -
январь 2016 г. 	АО “Аммофос-Максам”,
институт “Узкимё-
саноатлойиха”, 
Госархитектстрой
       	
9.	Проведение закрытых тендерных торгов по определению генерального подрядчика по строительству объекта на условиях “под ключ” (проектирование, строительство, поставка оборудования и пуско-наладочные работы), с заключением контракта с победителем торгов - подрядчиком.
            	январь - март 
2016 г.	Межведомственная 
тендерная комиссия
Кабинета Министров, 
ГАК “Узкимёсаноат”, 
АО “Аммофос-Максам”,
 Госархитектстрой, МВЭСИТ
       	
10.	Проведение ценовой экспертизы контракта по строительству объекта на условиях “под ключ” в установленном порядке в МВЭСИТ.	апрель 2016 г.	ГАК “Узкимёсаноат”, 
АО “Аммофос-Максам”, 
МВЭСИТ

3. Подготовка проектно-сметной документации
            	
11.	Завершение разработки Базового проекта победителем закрытых тендерных торгов - подрядчиком, его согласование и адаптация строительным нормам республики. 	ноябрь 2016 г.	ГАК “Узкимёсаноат”, 
АО “Аммофос-Максам”,
 институт “Узкимё-
саноатлойиха”
     	
12.	Разработка технико-экономического обоснования инвестиционного проекта на основе Базового проекта.	декабрь 2016 г.	ГАК “Узкимёсаноат”, 
АО “Аммофос-Максам”,
 институт “Узкимё-
саноатлойиха”
    	
13.	Проведение экспертизы технико-экономического обоснования инвестиционного проекта на научно-техническом совете института “Узтяжнефтегазхимпроект”.	январь 2017 г.	ГАК “Узкимёсаноат”, 
АО “Аммофос-Максам”,
институт “Узтяжнефтегаз-
химпроект”
         	
14.	Проведение экспертизы технико-экономического обоснования инвестиционного проекта в уполномоченных органах экспертизы. 	февраль-март 
2017 г.	ГАК “Узкимёсаноат”,
АО “Аммофос-Максам”,
Минэкономики, Минфин,
МВЭСИТ, ФРРУ,
Госархитектстрой, АКБ 
“Узпромстройбанк” 
      	
15.	Подготовка и согласование проекта правительственного решения по утверждению технико-экономического обоснования инвестиционного проекта, с внесением в Кабинет Министров.	апрель 2017 г.	ГАК “Узкимёсаноат”,
АО “Аммофос-Максам”,
Минэкономики, Минфин,
МВЭСИТ, Госархитектстрой,
АКБ “Узпромстройбанк”, 
заинтересованные 
министерства и ведомства 

4. Строительство производства серной кислоты
         	
16.	Размещение заказов на изготовление технологического оборудования и комплектующих узлов.
Изготовление технологического оборудования и комплектующих узлов.
       	январь 2017 г.

февраль 2017 г. - март 2018 г.	ГАК “Узкимёсаноат”, 
АО “Аммофос-Максам”,
 победитель закрытых 
тендерных торгов - подрядчик
      	
17.	Завершение поставки технологического оборудования и выполнения строительно-монтажных работ.	июль 2018 г.	ГАК “Узкимёсаноат”,
АО “Аммофос-Максам”,
победитель закрытых 
тендерных торгов - подрядчик
              	
18.	Монтаж технологического оборудования и выполнение пуско-наладочных работ. 	август - ноябрь 
2018 г.	ГАК “Узкимёсаноат”,
АО “Аммофос-Максам”,
Госархитектстрой, победитель
закрытых тендерных
торгов - подрядчик
       	
19.	Ввод производства серной кислоты в эксплуатацию 
(с освоением производства в I полугодии 2019 г.).	декабрь 2018 г.	ГАК “Узкимёсаноат”,
АО “Аммофос-Максам”,
победитель закрытых 
тендерных торгов - подрядчик

II. По инвестиционному проекту “Строительство нового производства серной кислоты
мощностью 650 тыс. тонн в год на ГП “Навоийский ГМК” 

1. Организация процедур по подготовке и проведению закрытых тендерных торгов по выбору генерального
подрядчика по строительству объекта на условиях “под ключ” 
            	
1.	Включение инвестиционного проекта в адресный список строек 2016 года.	январь 2016 г.	ГП “Навоийский ГМК”,
Министерство финансов,
Министерство экономики
  	
2.	Определение перечня объектов действующего производства и инфраструктуры, подлежащих использованию при строительстве нового производства.	март 2016 г.	ГП “Навоийский ГМК”, 
ГИ “Саноатгеоконтех-
назорат”, институт 
“Узкимёсаноатлойиха”
          	
3.	Разработка и экспертиза тендерной документации. Заключение контракта с организатором торгов.	апрель-май 2016 г.	ГП “Навоийский ГМК”,
институт “Узкимёсаноат-
лойиха”, Госархитектстрой
      	
4.	Проведение закрытых тендерных торгов по определению генерального подрядчика по строительству объекта на условиях “под ключ” (проектирование, строительство, поставка оборудования и пуско-наладочные работы), с заключением контракта с победителем торгов - подрядчиком.
        	июнь - ноябрь 
2016 г.	Межведомственная
 тендерная комиссия 
Кабинета Министров,
 ГП “Навоийский ГМК”, 
Госархитектстрой, МВЭСИТ
  	
5.	Проведение ценовой экспертизы контракта по строительству объекта на условиях “под ключ” в установленном порядке в МВЭСИТ.
       	декабрь 2016 г.	ГП “Навоийский ГМК”, 
МВЭСИТ

2. Подготовка проектно-сметной документации
           	
6.	Подготовка исходных данных для разработки технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.
       	январь 2017 г.	ГП “Навоийский ГМК”, 
институт “Узкимёсаноат-
лойиха”
   	
7.	Разработка технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.
    	февраль-март 2017 г.	ГП “Навоийский ГМК”, 
институт “Узкимёсаноатлойиха”
      	
8.	Проведение экспертизы технико-экономического обоснования инвестиционного проекта на научно-техническом совете института “Узтяжнефтегазхимпроект”. 
            	апрель 2017 г.	Институт “Узтяжнефте-
газхимпроект”,
ГП “Навоийский ГМК”
   	
9.	Проведение экспертизы технико-экономического обоснования инвестиционного проекта в уполномоченных органах экспертизы. 	май-июнь 2017 г.	ГП “Навоийский ГМК”,
Минэкономики, МВЭСИТ,
Минфин, Госархитектстрой, 
АКБ “Узпромстройбанк”, 
институт “Узкимёсаноат-
лойиха” 
        	
10.	Подготовка и согласование проекта правительственного решения по утверждению технико-экономического обоснования инвестиционного проекта, с внесением в Кабинет Министров. 
   	июль 2017 г.	ГП “Навоийский ГМК”,
Минэкономики, Минфин, 
МВЭСИТ, Госархитектстрой, 
АКБ “Узпромстройбанк”, 
заинтересованные 
министерства и ведомства

3. Строительство производства серной кислоты
             	
11.	Размещение заказа на изготовление технологического оборудования и комплектующих узлов.
Изготовление технологического оборудования и комплектующих узлов.
      	июнь 2017 г.

июль 2017 г. - 
август 2018 г.	ГП “Навоийский ГМК”,
победитель закрытых 
тендерных торгов - подрядчик 
        	
12.	Завершение поставки технологического оборудования и выполнения строительно-монтажных работ.
       	ноябрь 2018 г.	ГП “Навоийский ГМК”,
победитель закрытых 
тендерных торгов - подрядчик
         	
13.	Монтаж технологического оборудования и выполнение пуско-наладочных работ. 
  	декабрь 2018 г. - 
май 2019 г.
  	ГП “Навоийский ГМК”,
 победитель закрытых 
тендерных торгов - подрядчик
   	
14.	Ввод производства серной кислоты в эксплуатацию 
(с освоением производства до декабря 2019 г.).	июнь - сентябрь 
2019 г.	ГП “Навоийский ГМК”,
победитель закрытых
тендерных торгов - подрядчик

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
30 марта 2015 г., N 12, ст. 135