ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
27.07.2018 г. 
N ПП-3885

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ В ГОРОДЕ
ДЖИЗАКЕ" С УЧАСТИЕМ АЗИАТСКОГО
БАНКА РАЗВИТИЯ

Приложение N 1. Основные технико-экономические
параметры скорректированного технико-экономического
обоснования проекта "Развитие системы канализации
в городе Джизаке"
               
Приложение N 2. Прогнозный график погашения займа
Азиатского банка развития и выплаты процентов по проекту
"Развитие системы канализации в городе Джизаке"
            
Приложение N 3. Прогноз распределения долей покрытия
расходов по обслуживанию займа Азиатского банка развития
по проекту "Развитие системы канализации в городе Джизаке"
         
Приложение N 4. "Дорожная карта" по реализации проекта
"Развитие системы канализации в городе Джизаке"
с участием Азиатского банка развития

В целях своевременной и эффективной реализации мер, направленных на улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки города Джизака за счет модернизации и совершенствования системы канализации города:

1. Принять к сведению, что:
постановлением Президента Республики Узбекистан от 11 декабря 2015 года N ПП-2447 "О мерах по реализации проекта "Развитие системы канализации в городе Джизаке" с участием Азиатского банка развития" утверждено технико-экономическое обоснование проекта "Развитие системы канализации в городе Джизаке" (далее - проект), предусматривающее выделение займа в размере 53,999 миллионов специальных прав заимствования (в эквиваленте 79,5 миллионов долларов США) со сроком погашения 25 лет, включая пятилетний льготный период;
на основании результатов проведенной в декабре 2016 года миссии Азиатского банка развития (далее - АБР) по среднесрочному обзору хода реализации проекта подписан Меморандум о взаимопонимании с АБР, предусматривающий одобрение переноса площадки канализационных очистных сооружений;
выполнена корректировка технико-экономического обоснования проекта в связи с переносом площадки канализационных очистных сооружений, по результатам которой проектная стоимость в части средств АБР снизилась на 17,608 миллионов долларов США;
вклад Республики Узбекистан в реализацию проекта составляет в эквиваленте 11,719 миллионов долларов США, в том числе 11,515 миллионов долларов США в виде предоставления льгот по налогам и другим обязательным платежам;
вопрос переноса площадки канализационных очистных сооружений рассмотрен на заседании Кенгаша народных депутатов Джизакской области, по итогам которого 26 июня 2018 года принято соответствующее решение, в том числе предусматривающее доведение до общественности сути и значения проекта, а также установление депутатского контроля за ходом его реализации.

2. Утвердить:
скорректированное технико-экономическое обоснование проекта "Развитие системы канализации в городе Джизаке" с основными технико-экономическими параметрами согласно приложению N 1;
прогнозный график погашения займа Азиатского банка развития и выплаты процентов по проекту "Развитие системы канализации в городе Джизаке" согласно приложению N 2;
прогноз распределения долей покрытия расходов по обслуживанию займа Азиатского банка развития по проекту "Развитие системы канализации в городе Джизаке" согласно приложению N 3;
"Дорожную карту" по реализации проекта "Развитие системы канализации в городе Джизаке" (далее - "Дорожная карта") согласно приложению N 4.

3. Первому заместителю Премьер-министра Республики Узбекистан - председателю правления АО "Узбекистон темир йуллари" Раматову А.Ж.:
в недельный срок создать Комиссию по координации реализации проекта и выполнению "Дорожной карты" (далее - Комиссия) под председательством заместителя хокима Джизакской области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства (Рахманкулов), включив в ее состав руководителей секторов по комплексному социально-экономическому развитию города Джизака;
обеспечить заслушивание ежеквартальных отчетов министра жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан и хокима Джизакской области о ходе реализации проекта;
с выездом на место обеспечить личный контроль и принимать необходимые меры по своевременному и качественному выполнению работ в рамках проекта.

4. Установить, что расходы, связанные с погашением займа АБР и выплатой процентов по нему, начиная с 2021 года осуществляются за счет собственных средств ГУП "Сувокава" Джизакской области, а в недостающей части - за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан в долях в соответствии с приложением N 3.

5. Министерству жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан для обеспечения контроля за своевременным погашением ГУП "Сувокава" Джизакской области займа АБР и выплатой процентов по нему обеспечить открытие в Агентстве "Коммунхизмат" специального счета для аккумулирования средств ГУП "Сувокава" Джизакской области, необходимых на эти цели. 

6. Возложить персональную ответственность на:
первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан - председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Раматова А.Ж. - за эффективную организацию работы по координации деятельности государственных органов и организаций в рамках реализации проекта;
хокима Джизакской области Салиева Э.А. и руководителя Комиссии Рахманкулова А.Б. - за своевременную и качественную реализацию проекта и выполнение "Дорожной карты", а также обеспечение аккумулирования средств ГУП "Сувокава" Джизакской области на специальном счете Агентства "Коммунхизмат";
директора Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Кудратходжаева Б.Б. - за обеспечение полноты поступления платежей за услуги водоснабжения и водоотведения, сокращение задолженности потребителей; 
на заместителя Премьер-министра - министра финансов Республики Узбекистан Кучкарова Д.А. и министра жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан Салиева М.Х. - за своевременное погашение займа АБР и начисленных по нему процентов.

7. Министерству финансов Республики Узбекистан в установленном порядке внести, при необходимости, соответствующие изменения в Заемное соглашение с АБР, вытекающие из настоящего постановления.

8. Министерству жилищно-коммунального обслуживания совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям по результатам проведенных тендерных торгов в рамках проекта подготовить обоснованные предложения об использовании сэкономленных средств АБР для дальнейшего развития системы канализации города Джизака.

9. Признать утратившими силу абзац третий пункта 1, абзац четвертый пункта 2 и пункт 5 постановления Президента Республики Узбекистан от 11 декабря 2015 года N ПП-2447 "О мерах по реализации проекта "Развитие системы канализации в городе Джизаке" с участием Азиатского банка развития", а также приложения NN 1 и 2 к нему.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан - председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Раматова А.Ж., заместителя Премьер-министра - министра финансов Республики Узбекистан Кучкарова Д.А. и хокима Джизакской области Салиева Э.А.

Президент
Республики Узбекистан                                                     Ш. Мирзиёев

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению Президента РУз
от 27.07.2018 г. N ПП-3885

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
скорректированного технико-экономического
обоснования проекта "Развитие системы
канализации в городе Джизаке"

      
N
      	      
Наименование 
показателей
       	          
Ед. изм.
      	     
Всего*
       	     
в том числе за счет:

средств ГУП "Сувокава" Джизакской области
     	       
Республики 
Узбекистан
         	      
займа АБР
         	
1.	Предельная стоимость проекта
	тыс. долл. США
	91 222,4 	203,8 	11 515,0 	79503,6**	
2.	Предельная сумма капвложений, всего
	тыс. долл. США
	79 707,4 	203,8 	 	79 503,6 	
2.1.	машины и оборудование
	тыс. долл. США
	9 132,6 	 	 	9 132,6 	
	в СКВ
	тыс. долл. США
	6 427,1 	 	 	6 427,1 	
	в национальной валюте
	экв. тыс. долл. США
	2 705,5 	 	 	2 705,5 	
2.2.	строительно-монтажные работы
	экв. тыс. долл. США
	43 542,5 	203,8 	 	43 338,7 	
	в СКВ
	тыс. долл. США	5 981,7 	 	 	5 981,7 	
	в национальной валюте
	экв. тыс. долл. США
	37 560,8 	203,8 	 	37 357,0 	
2.3.	прочие затраты***
	экв. тыс. долл. США
	6 881,5 	 	 	6 881,5 	
	в СКВ
	тыс. долл. США
	4 086,7 	 	 	4 086,7 	
	в национальной валюте
	экв. тыс. долл. США
	2 794,8 	 	 	2 794,8 	
2.4.	финансовые издержки инвестиционного периода
	тыс. долл. США
	2 543,0 	 	 	2 543,0 	
2.5.	резервные средства
	тыс. долл. США
	17 607,8 	 	 	17 607,8 	
3.	Предоставление налоговых и таможенных льгот
	экв. тыс. долл. США
	11 515,0 	 	11 515,0 	 	
4.	Мощность реконструируемой системы канализации
	30,0 тыс. куб. м/сут.
	
5.	Предполагаемое количество занятых, чел.
	82 чел.
	
6.	Срок окупаемости проекта, лет
	-	
7.	Стоимость создаваемых производственных фондов
	79 707,4 экв. тыс. долл. США
	
8.	Продолжительность инвестиционного периода
	64 месяца
	
9.	Срок предоставления заемных средств АБР
	25 лет
	
	в том числе льготный период
	5 лет

        
*) Окончательные стоимостные показатели будут определены по результатам подготовки детальной проектно-сметной документации, тендеров на поставку товаров (работ, услуг) и выполнения строительных работ.

**) Прогнозный курс принят расчетно 1 СПЗ = 1,472316 долл. США.

***) Оплата налога на доходы физических лиц и единого социального платежа будет осуществляться за счет средств кредита АБР.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению Президента РУз
от 27.07.2018 г. N ПП-3885

ПРОГНОЗНЫЙ ГРАФИК
погашения займа Азиатского банка развития
и выплаты процентов по проекту "Развитие
системы канализации в городе Джизаке"*

Сумма займа АБР	53 999 000 СПЗ**	(экв. 79,5 млн долл. США)	
				
Процентная ставка	2,0%			
				
Срок погашения займа АБР	25 лет, в том числе 5-летний льготный период		

в СПЗ
        
Дата платежа
     	     
Сумма выплаты 
основного долга
       	   
Сумма выплаты
процентов
        	     
Общая сумма, 
подлежащая выплате
      	
2015 г. - 30 апреля 2021 г.***
         	 	 	 	
15 апреля 2021 г.
	1 350 000,0	93 000,0	1 443 000,0	
15 октября 2021 г.
	1 350 000,0	535 300,0	1 885 300,0	
15 апреля 2022 г.
	1 350 000,0	518 700,0	1 868 700,0	
15 октября 2022 г.
	1 350 000,0	507 800,0	1 857 800,0	
15 апреля 2023 г.
	1 350 000,0	491 400,0	1 841 400,0	
15 октября 2023 г.
	1 350 000,0	480 400,0	1 830 400,0	
15 апреля 2024 г.
	1 350 000,0	466 700,0	1 816 700,0	
15 октября 2024 г.
	1 350 000,0	452 900,0	1 802 900,0	
15 апреля 2025 г.
	1 350 000,0	436 800,0	1 786 800,0	
15 октября 2025 г.
	1 350 000,0	425 500,0	1 775 500,0	
15 апреля 2026 г.
	1 350 000,0	409 500,0	1 759 500,0	
15 октября 2026 г.
	1 350 000,0	398 000,0	1 748 000,0	
15 апреля 2027 г.
	1 350 000,0	382 200,0	1 732 200,0	
15 октября 2027 г.
	1 350 000,0	370 600,0	1 720 600,0	
15 апреля 2028 г.
	1 350 000,0	356 900,0	1 706 900,0	
15 октября 2028 г.
	1 350 000,0	343 100,0	1 693 100,0	
15 апреля 2029 г.
	1 350 000,0	327 600,0	1 677 600,0	
15 октября 2029 г.
	1 350 000,0	315 700,0	1 665 700,0	
15 апреля 2030 г.
	1 350 000,0	300 300,0	1 650 300,0	
15 октября 2030 г.
	1 350 000,0	288 200,0	1 638 200,0	
15 апреля 2031 г.
	1 350 000,0	273 000,0	1 623 000,0	
15 октября 2031 г.
	1 350 000,0	260 800,0	1 610 800,0	
15 апреля 2032 г.
	1 350 000,0	247 100,0	1 597 100,0	
15 октября 2032 г.
	1 350 000,0	233 300,0	1 583 300,0	
15 апреля 2033 г.
	1 350 000,0	218 400,0	1 568 400,0	
15 октября 2033 г.
	1 350 000,0	205 900,0	1 555 900,0	
15 апреля 2034 г.
	1 350 000,0	191 100,0	1 541 100,0	
15 октября 2034 г.
	1 350 000,0	178 400,0	1 528 400,0	
15 апреля 2035 г.
	1 350 000,0	163 800,0	1 513 800,0	
15 октября 2035 г.
	1 350 000,0	151 000,0	1 501 000,0	
15 апреля 2036 г.
	1 350 000,0	137 300,0	1 487 300,0	
15 октября 2036 г.
	1 350 000,0	123 500,0	1 473 500,0	
15 апреля 2037 г.
	1 350 000,0	109 200,0	1 459 200,0	
15 октября 2037 г.
	1 350 000,0	96 100,0	1 446 100,0	
15 апреля 2038 г.
	1 350 000,0	81 900,0	1 431 900,0	
15 октября 2038 г.
	1 350 000,0	68 600,0	1 418 600,0	
15 апреля 2039 г.
	1 350 000,0	54 600,0	1 404 600,0	
15 октября 2039 г.
	1 350 000,0	41 200,0	1 391 200,0	
15 апреля 2040 г.
	1 350 000,0	27 500,0	1 377 500,0	
15 октября 2040 г.
	1 349 000,0	13 700,0	1 362 700,0	
Итого
      	53 999 000,0	10 777 000,0	64 776 000,0	

*) Суммы платежей будут уточняться в зависимости от фактических дат освоения займа.

**) СПЗ - специальные права заимствования. Прогнозный курс принят расчетно 1 СПЗ = 1,472316 долл. США.

***) В данный период предусматривается капитализация процентов в счет займа АБР.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Постановлению Президента РУз
от 27.07.2018 г. N ПП-3885

ПРОГНОЗ
распределения долей покрытия расходов
по обслуживанию займа Азиатского банка
развития по проекту "Развитие системы
канализации в городе Джизаке"

     
Годы
     	        
Доля ГУП "Сувокава" 
Джизакской области
        	        
Доля Государственного бюджета 
Республики Узбекистан
         	
2021
	1,0%	99,0%	
2022
	2,0%	98,0%	
2023
	2,0%	98,0%	
2024
	3,0%	97,0%	
2025
	2,0%	98,0%	
2026
	3,0%	97,0%	
2027
	4,0%	96,0%	
2028
	5,0%	95,0%	
2029
	7,0%	93,0%	
2030
	8,0%	92,0%	
2031
	10,0%	90,0%	
2032
	13,0%	87,0%	
2033
	16,0%	84,0%	
2034
	20,0%	80,0%	
2035
	24,0%	76,0%	
2036
	29,0%	71,0%	
2037
	36,0%	64,0%	
2038
	44,0%	56,0%	
2039
	53,0%	47,0%	
2040
	54,0%	46,0%	

Примечание. При ежегодном формировании проекта Государственного бюджета Республики Узбекистан по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан возможно изменение доли ГУП "Сувокова" Джизакской области в обслуживании финансовых средств АБР, исходя из финансового состояния данного предприятия, с соответствующим изменением доли Государственного бюджета Республики Узбекистан в расходах на указанные цели.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Постановлению Президента РУз
от 27.07.2018 г. N ПП-3885

"ДОРОЖНАЯ КАРТА"
по реализации проекта "Развитие
системы канализации в городе Джизаке"
с участием Азиатского банка развития

I. Разработка и утверждение тендерной документации
II. Проведение тендерных торгов и заключение контрактов
III. Согласование и оплата авансовых платежей
IV. Строительно-монтажные работы

    
N
п/п
         	       
Наименование 
мероприятий
     	       
Сроки 
реализации
        	       
Ответственные 
исполнители

I. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
         	
1	Разработка тендерной документации.
	до 5 августа 2018 г.	Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев)
	
2	Согласование тендерной документации с уполномоченными органами.
	до 30 августа 2018 г.	Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), ГУП "Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов" при НАПУ (Паратов)
	
3	Формирование закупочной комиссии.
	до 10 августа 2018 г.	Госкоминвестиций (Бекенов), Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев)
	
4	Обеспечение рассмотрения и согласования тендерной документации с АБР.
	до 15 сентября 2018 г.	Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев)
	
5	Рассмотрение и утверждение тендерной документации закупочной комиссией.
	до 22 сентября 2018 г.	Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), закупочная комиссия (Салиев)

II. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ
И ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТОВ
      	
6	Отбор подрядных организаций:
	
6.1	Обеспечение публикации объявления о тендерных торгах на веб-сайте АБР и в средствах массовой информации Узбекистана.
	1 октября 2018 г.	Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
6.2	Подготовка предложений участниками тендерных торгов.
	не более 60 дней со дня объявления о тендерных торгах
	Участники тендерных торгов
	
6.3	Вскрытие и оценка предложений.
	до 25 января 2019 г.	Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
6.4	Обеспечение рассмотрения и одобрения результатов тендерных торгов со стороны АБР.
	не более 6 недель представления отчетов
	Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев)
	
6.5	Рассмотрение и утверждение результатов тендерных торгов закупочной комиссией.
	до 10 марта 2019 г.	Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), закупочная комиссия (Салиев)
	
6.6	Проведение переговоров и заключение контрактов.
	до 20 марта 2019 г.	Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), победитель тендерных торгов
	
7	Регистрация контрактов в Госкоминвестиций.
	до 30 марта 2019 г.	Госкоминвестиций (Бекенов), 

Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев)

III. СОГЛАСОВАНИЕ И ОПЛАТА АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
         	
8	Получение гарантий авансовых платежей.
	до 15 апреля 2019 г.	Подрядная организация, Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев)
	
9	Оплата авансовых платежей.
	30 апреля 2019 г.	Подрядная организация, Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев)

IV. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
       	
10	Мобилизационные работы подрядчиков на строительных площадках.
	апрель 2019 г.	Подрядная организация, Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
11	Установка современных систем видеонаблюдения на площадке канализационно-очистного сооружения для ведения ежедневного мониторинга.
	апрель 2019 г.	Минжилкомобслуживания (Салиев), хокимият Джизакской области (Салиев), Мининфоком (Ахмедходжае)
	
12	Выполнение строительных работ:
	
12.1	Строительство "под ключ" канализационных очистных сооружений г. Джизака мощностью 30,0 тыс. куб. м/сут.
	апрель 2019 г. -
апрель 2021 г.
	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2	Зона "А" - реконструкция и строительство 28,86 км городских коллекторов и насосных станций:
	апрель 2019 г. -
апрель 2021 г.
	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.1	Строительство коллектора-перемычки от временной КНС "Халкобод" до ул. Мустакиллик, протяженность 380 м, диаметр 1000 мм.
	апрель-июнь 2019 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.2	Строительство канализационной сети по ул. Шифокор, протяженность 380 м, диаметр 225 мм.
	апрель 2019 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.3	Строительство канализационной сети по ул. Кулматова, протяженность 507 м, диаметр 225 мм.
	апрель 2019 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.4	Строительство канализационной сети от ул. Сайилжойи до ул. У. Туракулова, протяженность 2586 м, диаметр 225 - 400 мм.
	май-август 2019 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.5	Строительство канализационной сети по ул. Шифокор-1, протяженность 668 м, диаметр 225 мм.
	май 2019 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.6	Строительство канализационной насосной станции "Халкобод".	май 2019 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.7	Строительство канализационной сети от туберкулезной больницы до новой КНС "Х. Носирова", протяженность 879 м, диаметр 225 мм.
	июнь-июль 2019 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.8	Строительство канализационной сети по ул. Навои (школа N 6), протяженность 220 м, диаметр 225 мм.
	июнь 2019 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.9	Строительство напорного коллектора от канализационной насосной станции "Х. Носирова", протяженность 1095 м, диаметр 160 мм.
	июль 2019 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.10	Строительство канализационной насосной станции "Х. Носирова".
	июль-сентябрь 2019 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.11	Строительство канализационной сети "Лечебный центр "Фирдавс", протяженность 1216 м, диаметр 315 - 400 мм.
	октябрь 2019 г.- 
январь 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.12	Строительство канализационной сети Сайилжой-3, протяженность 228 м, диаметр 160 мм.
	октябрь 2019 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.13	Строительство канализационной сети Сайилжой-4, протяженность 225 м, диаметр 225 мм.
	декабрь 2019 г. -
январь 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.14	Строительство канализационной сети Сайилжой-1, протяженность 157 м, диаметр 160 мм.
	январь-февраль 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.15	Строительство канализационной сети Сайилжой-2, протяженность 165 м, диаметр 160 мм.
	январь-февраль 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.16	Строительство канализационной сети от травматологической больницы до ул. Халкобод-1, протяженность 692 м, диаметр 225 мм.
	январь-февраль 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.17	Строительство канализационной сети и ее подключение к домам по ул. Ш. Рашидова, протяженность 77 м, диаметр 225 мм.
	февраль-март 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.18	Строительство канализационной сети и ее подключение к домам по ул. Ш. Рашидова, протяженность 179 м, диаметр 225 мм.
	февраль-март 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.19	Строительство канализационной сети от травматологической больницы до ул. Халкобод, протяженность 931 м, диаметр 315 мм.
	февраль-апрель 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.20	Строительство канализационной сети по пр. Халклар дустлиги от ул. Туракулова до ул. Хамза (сборная линия), протяженность 943 м, диаметр 630 мм.
	июль-ноябрь 2019 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.21	Строительство канализационной насосной станции "Зилол".
	октябрь 2019 г. -
январь 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.22	Строительство напорного коллектора от канализационной насосной станции "Зилол", протяженность 1594 м, диаметр 160 мм.
	март-апрель 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.23	Строительство канализационной сети по ул. Лойиха-1, протяженность 432 м, диаметр 225 мм.
	март 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.24	Строительство канализационной сети по ул. Лойиха-2, протяженность 699 м, диаметр 225 мм.
	март-апрель 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.25	Строительство канализационной сети по ул. Лойиха-6, протяженность 884 м, диаметр 225 мм.
	апрель-май 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.26	Строительство канализационной сети по ул. Лойиха-5, протяженность 866 м, диаметр 225 мм.
	апрель-май 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.27	Строительство канализационной сети по ул. Лойиха-7, протяженность 874 м, диаметр 160 мм.
	апрель-май 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.28	Строительство канализационной сети от ул. Исломжон до пр. Халклар дустлиги, протяженность 420 м, диаметр 225 мм.
	апрель 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.29	Строительство канализационной сети по ул. Равот до ул. Мустакиллик, протяженность 1108 м, диаметр 225 - 400 мм.
	май-июнь 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.30	Строительство канализационной сети по ул. Равот-1 до ул. Мустакиллик, протяженность 1283 м, диаметр 315 - 400 мм.
	май-июль 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.31	Строительство канализационной сети от ул. Бульварная до ул. Мелиева, протяженность 618 м, диаметр 315 мм.
	июнь-июль 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.32	Строительство канализационной сети по ул. Лойиха-1, махалля Ураптепалик, протяженность 353 м, диаметр 225 мм.
	июнь 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.33	Строительство канализационной сети от больницы "Согдиана" до пр. Халклар дустлиги, протяженность 349 м, диаметр 315 - 500 мм.
	июль-август 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.34	Строительство канализационной сети по ул. Лойиха-2, протяженность 443 м, диаметр 225 мм.
	август 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.35	Строительство канализационной сети по ул. Бульварная до пр. Халклар дустлиги, протяженность 332 м, диаметр 225 мм.
	сентябрь 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев)
	
12.2.36	Строительство канализационной сети по ул. О. Обидова, протяженность 966 м, диаметр 225 мм.
	июль-август 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.37	Строительство канализационной сети по ул. С. Рахимова, протяженность 912 м, диаметр 225 мм.
	август-сентябрь 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.38	Строительство канализационной сети по ул. Б. Аламова, протяженность 866 м, диаметр 225 мм.
	сентябрь-октябрь 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.39	Строительство канализационной сети по ул. Навруз, протяженность 877 м, диаметр 225 мм.
	октябрь-ноябрь 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.40	Строительство канализационной сети по ул. Зарафшон, протяженность 874 м, диаметр 225 мм.
	ноябрь-декабрь 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.2.41	Строительство канализационной сети для 2-этажных коттеджей, протяженность 332 м, диаметр 225 мм.
	ноябрь 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.3	Зона "В" - реконструкция и строительство 14,21 км городских коллекторов:
	апрель 2019 г. - 
апрель 2021 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.3.1	Строительство канализационного коллектора по ул. Ташкентская, протяженность 1876 м, диаметр 500 мм.
	апрель-июль 2019 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.3.2	Строительство канализационной сети от ул. Рабочая до ул. Ташкентская, протяженность 611 м, диаметр 400 мм.
	июнь-август 2019 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.3.3	Строительство канализационной сети от ул. Ташкентская до Политехнического института, протяженность 1979 м, диаметр 400 мм.
	август-ноябрь 2019 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.3.4	Строительство канализационной сети по пр. Халклар дустлиги до ул. Калия, протяженность 525 м, диаметр 315 мм.
	декабрь 2019 г. - 
февраль 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.3.5	Строительство канализационной сети от 4-АТС до существующей КНС махалли Иттифок, протяженность 291 м, диаметр 500 мм.
	декабрь 2019 г. -
март 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.3.6	Строительство канализационной сети от строительно-индустриальной базы до комплекса "НУР", протяженность 636 м, диаметр 315 мм.
	февраль-апрель 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.3.7	Строительство коллектора в микрорайоне-3, протяженность 281 м, диаметр 400 мм.
	март-май 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.3.8	Строительство канализационной сети от ул. Ташкентская до Политехнического института, протяженность 1865 м, диаметр 400 мм.
	апрель-июль 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.3.9	Строительство канализационной сети от автошколы до ул. Тукимачилар, протяженность 648 м, диаметр 315 мм.
	август-сентябрь 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.3.10	Строительство коллектора от махалли Дустлик до бывшего автобусного парка, протяженность 467 м, диаметр 400 мм.
	июнь-июль 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.3.11	Строительство канализационного коллектора по ул. Кушакова, протяженность 1135 м, диаметр 225 - 400 мм.
	июль-сентябрь 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.3.12	Строительство канализационного коллектора от ул. Навоий до ул. Тукимачилар, протяженность 728 м, диаметр 500 мм.
	август-сентябрь 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.3.13	Строительство коллектора по территории СЭЗ "Джизак", протяженность 3112 м, диаметр 1200 мм.
	август 2020 -
апрель 2021 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.4	Зона "С" - строительство 18,1 км городских коллекторов и 1 насосной станции:
	апрель 2019 г. -
апрель 2021 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.4.1	Строительство напорного коллектора от канализационной насосной станции "Учтепа" до ССГ Кушбармок, протяженность 3997 м, диаметр 315 мм.
	апрель-октябрь 2019 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.4.2	Строительство самотечного коллектора от махалли Зилол до ССГ Кушбармок, протяженность 5582 м, диаметр 1000 мм.	июль 2019 г. -
декабрь 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
12.4.3	Строительство самотечного коллектора от территории СЭЗ "Джизак" до ССГ Кушбармок, протяженность 8717 м, диаметр 1200 мм.	май 2019 г. -
апрель 2021 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), Минжилкомобслуживания (Салиев)
	
12.4.4	Строительство канализационной насосной станции "Учтепа".
	апрель-июль 2020 г.	Подрядная организация, Минжилкомобслуживания (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
13	Технический надзор за строительством объектов.
	апрель 2019 г. -
апрель 2021 г. 
	Консультант, Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев)
	
14	Мониторинг реализации проекта.
	в период реализации проекта	Комиссия (Рахмонкулов), ИАД Кабинета Министров (Махкамов), Минжилкомобслуживания (Салиев), Госкоминвестиций (Бекенов), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев)
	
15	Представление периодических отчетов о ходе реализации проекта.
	ежемесячно	Комиссия (Рахмонкулов), Минжилкомобслуживания (Салиев), хокимият Джизакской области (Салиев), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев) ИАД Кабинета Министров (Махкамов)
	
16	Открытие в Агентстве "Коммунхизмат" специального счета для аккумулирования средств ГУП "Сувокова" Джизакской области, необходимых для обеспечения контроля за своевременным погашением займа АБР и выплатой процентов.
	апрель 2021 г.	Минжилкомобслуживания (Салиев), Минфин (Каримов), Агентство "Коммунхизмат" (Таджибаев)
	
17	Обеспечение полноты и своевременности поступления платежей за услуги водоснабжения и водоотведения, сокращение дебиторской задолженности потребителей.
	на постоянной основе	Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре (Кудратходжаев), Комиссия (Рахмонкулов), Минжилкомобслуживания (Салиев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
18	Укомплектование ГУП "Сувокова" Джизакской области квалифицированными кадрами, реализация организационно-практических мер по совершенствованию профессиональных навыков персонала, налаживание системного обучения.
	на постоянной основе	Минжилкомобслуживания (Салиев), хокимият Джизакской области (Салиев)
	
19	Улучшение технического состояния биологического пруда на действующем канализационно-очистном сооружении, в частности принятие мер:
по обезвреживанию сточных вод перед сбросом на коллектор "Улкурсой";
по увеличению количества водных растений на биологическом пруде.
	август 2018 г. -
апрель 2021 г.	Хокимият Джизакской области (Салиев), ГУП "Сувокова" Джизакской области (Мамарасулов)
	
20	Обеспечение строительства первичных очистных сооружений на промышленных предприятиях, расположенных на территории СЭЗ "Джизак", в соответствии с установленными требованиями.
	август 2018 г. -
август 2019 г.	Хокимият Джизакской области (Салиев), ГУП "Сувокова" Джизакской области (Мамарасулов), Дирекция СЭЗ "Джизак" (Зоиров)

      
Примечание. Сроки исполнения мероприятий могут быть уточнены по результатам согласований с АБР.

Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 30 июля 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
30 июля 2018 г., N 30, ст. 624